10

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 장흥군에서 2016년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척율 (%)
정남진 우산도 관광지 조성사업	28,900	6,940	2,617	19,793	2020년	2009년	53%
2016 장흥국제통합의학박람회	24,699	5,453	19,246	-	2016년	2014년	100%
도시가스(LNG)공급	10,787	3,780	3,830	3,127	2018년	2012년	90%
탐진강 관광명소화 사업	8,000	-	2,850	5,150	2019년	2015년	15%
정남진권 푸른숲 조성사업	6,000	1,500	1,600	2,900	2018년	2015년	75%
블루투어 수문랜드 조성사업	5,000	-	91	4,909	2018년	2016년	10%
공공형승마장 조성사업	4,482	2,082	2,400	-	2017년	2014년	65%
향토산업 육성사업	3,000	-	700	2,300	2019년	2016년	30%
지하시설물전산화사업	1,920		233	1,687	2018년	2016년	29%

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

정남진 우산도 관광지 조성사업

담당자

문화관광과 관광개발담당

□ 사업목적 및 필요성

○ 청정해역 풍부한 해양자원을 활용한 국제적인 해양 관광명소 개발

○ 정남진 고유브랜드를 육성하여 인근 강진 청자도요지, 보성 녹차밭과 연계한

테마형 관광루트 형성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2020년

○ 위 치 : 장흥군 관산읍 삼산리 1566번지 일원

○ 규 모 : 관광지 조성 403,358㎡

- 공공부분 : 공공편의시설(도로,주차장,상하수도), 휴양문화시설(전망대, 테마숲공원) 등

- 민간부분 : 상가시설, 오락시설, 숙박시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	20118년 이후
계	28,900	6,940	2,167	500	19,293
국 비	7,900	4,164	1,300	300	2,136
시 도 비
시군구비	6,900	2,776	867	200	3,057
지 방 채
민간자본	14,100				14,100
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53%)

○ 정남진 우산도 관광지 지정승인       : ’07. 06. 26.

○ 정남진 우산도 관광지 조성계획 승인  : ’08. 03. 07.

○ 지방재정 투융자 심사                : ’09. 04. 29.

○ 정남진 우산도 관광지 조성사업 공사추진 : ’12. 08. 10. ~ ’19. 02. 02.

- 테마숲공원조성, 주진입도로 조성 / 91%

□ 향후계획

○ 민가투자사 확정 및 민간투자지역 조성

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

2016 장흥국제통합의학박람회

담당자

기업지원과 박람회조직위

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가적 전략사업으로 국내 통합의학 육성 및 새로운 패러다임으로서 통합의학 제시,

질병 예방 기능 강화로 100세 시대의 국민 건강수명 증대 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2016. 9. 29. ~ 10. 31. / 33일간

○ 위  치 : 전남 장흥군 안양면 비동리 일원

○ 규  모 : 77,227㎡ / 47개국 284개 의료기관·단체·기업

○ 관람객 : 1,214,301명(내국인 1,166,141 / 외국인 48,160)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,699백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	24,699	5,453	19,246
국 비	5,700	1,400	4,300
시 도 비	4,300	653	3,647
시군구비	11,199	3,400	7,799
지 방 채	-	-	-
민간자본	-	-	-
기 타	3,500	-	3,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 4. 11 : 국제기구 국내유치 확정

○ 2016. 9. 29 ~ 10. 31 : 장흥국제통합의학박람회 개최

○ 2017. 4. 17 : 사후평가보고서 제출

□ 향후계획

○ 2017. 12월 : 2020 장흥국제통합의학박람회 개최를 위한 기본계획 제출(조직위 → 복지부)

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도시가스(LNG)공급

담당자

기업지원과 기업지원담당

□ 사업목적 및 필요성

○ 저렴하고 안전한 도시가스를 공급함으로써 환경오염 예방 및 군민

삶의 질 향상

○ 산업기반시설 확충을 통한 기업의 투자유치 확대 기여

□ 사업개요

○ 사 업 자 : (주)해양도시가스 / GS칼텍스 자회사

○ 위    치 : 장흥군 장흥읍 일원

○ 사업규모 : 3,355세대 / 관로연장 25.1km(중압 13.3, 저압 11.8)

▸ 정압기 : 5개소(지구정압기 1,  지역정압기 4)

○ 사업기간 : 2015 ~ 2019(5년, 초기 3년간 95% 공정)

○ 사 업 비 : 10,787백만원(도비 400 군비 / 군비 4,638 / 사업자 5,749)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,787백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	10,787	3,780	3,830	3,127	50
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	400	100	150	100	50
시군구비	4,638	1,700	1,700	1,238	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	5,749	1,980	1,980	1,789	--
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  90%)

○ 2015년 도시가스 배관공사(1차 준공) / 15. 12월

- 사업량 : 18km(중압 6.6km, 저압 11.4km)

※ 미래1차, 계명아파트, 청하아파트, 솔뫼타운, 수창휴그린아파트 등

○ 2016년 도시가스 배관공사 완료

- 사업량 : 5.2km(중압 1.8km, 저압 3.4km)

○ 2017년도 중압 및 저압 배관공사 추진 / 0.9㎞      : ‘17. 1 ~

□ 향후계획

○ 장흥바이오산업단지 추진 / 1㎞

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

탐진강 관광명소화사업

담당자

문화관광과 관광개발담당

□ 사업목적 및 필요성

○ 탐진강 일원의 자연환경을 활용한 물축제 프로그램 다양화 및 관광객이 다시       찾을 수 있는 상시 관광명소로 개발

○ 탐진강 주변 정남진 토요시장, 편백숲우드랜드 등 관광지와 연계한 지속

발전 가능한 관광 자원의 개발 필요.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019년

○ 위 치 : 장흥군 장흥읍 건산리 탐진강 일원

○ 규 모 : 음악분수, 징검다리, 종합물놀이장(야외수영장, 어린이 물놀이장)

바닥분수, 계류시설, 벽천분수 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	20118년 이후
계	8,000		2,850	2,500	2,650
국 비	4,800	-	1,710	1,500	1,590
시 도 비
시군구비	3,200	-	1,140	1,000	1,060
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 탐진강 관광명소화사업 기본계획 수립  : ’15. 04.

○ 탐진강 관광명소화사업 실시설계 용역  : ’16. 01. ~ ’16. 12.

○ 탐진강 물문화공원 군관리계획 수립    : `16. 09. ~ `17. 06.

○ 탐진강 관광명소화 사업 추진          : `17. 06. ~ ’19. 12.

- 1차분 : 음악분수, 징검다리 등

□ 향후계획

○ ’18. 06월까지 종합물놀이장  완료하여 정남진 물축제와 연계

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

정남진권 푸른숲 조성사업

담당자

환경산림과 녹지담당

□ 사업목적 및 필요성

○ 남도의 차별화된 해안방풍숲 및 경관숲 조성으로 관광 활성화

○ 간척지 유휴공간 활용으로 연안 환경생태복원 및 관광자원화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. ~2018년

○ 위 치 : 장흥군 관산읍 신동리 등 3개리(정남진 일원)

○ 규 모 : 300ha/해송 및 난대상록수 식재 방풍림 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	20118년 이후
계	6,000	1,446	1,376	1,194	1,984
국 비	3,000	723	688	597	992
시 도 비	300	217	206	179	298
시군구비	2,100	506	482	418	694
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 현장조사, 의견수렴, 기본계획 수립 및 실시설계, 심사 등

○ 2015년 : 방풍림 75ha 및 경관숲 8.4ha 조성 / 해송 외 13종 30,111본 식재

○ 2016년 : 방풍림 80ha / 해송 외 7종 9,410본 식재, 2015 사업지 모니터링 및 사후관리    ○ 2017년 : 방풍림 70ha / 후박 외 11종 11,530본 식재․퍼걸러 1개소

□ 향후계획

○ 2018년 방풍림 조성 및 기존 사업지 수목 시비, 수형조절, 병해충방제

제초 등 사후관리

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

블루투어 수문랜드 조성사업

담당자

해양수산과 해양시설담당

□ 사업목적 및 필요성

○ 타 시도 해양관광지에 비해 여가‧휴양, 건강증진 등에 관한 프로그램 및

기반시설이 부족하여 관광객 유출로 이어지고 있어 수문권역 명품관광랜드

조성으로 지역경제 활성화 및 어업인 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1월 ~ 2018. 12월(3년)

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 안양면 수문리 산33-13번지 일원

○ 규 모 : 65,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,000	0	91	2,454	2,455
국 비	2,500	0	45.5	1,227	1,227.5
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	2,500	0	45.5	1,227	1,227.5
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 지방재정 투융자심사 : 2016. 6. 9.

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2017. 5. 12.

○ 사전 재해영향성 검토 용역 및 소규모 환경영향평가 용역 : 2017. 6. 4.

□ 향후계획

○ 공사 발주 및 부지 조성

○ 오토캠핑장, 다기능복합단지, 해양체육공원 조성

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

공공형승마장 조성사업

담당자

농업축산과 한우산업담당

□ 사업목적 및 필요성

○ 승마장 조성에 따른 승마 사업의 지속적, 체계적인 발전

○ 로하스타운 지구 조성, 우드랜드 운영 등과 연계한 승마인의 저변 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017년

○ 위 치 : 장흥군 안양면 기산리 로하스타운 조성 지역

○ 규 모 : 부지 28,907㎡, 시설 3,687㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,084백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	20118년 이후
계	4,482	2,082		2,400
국 비	1,850	650		1,200
시 도 비	130	130
시군구비	2,502	1,302		1,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 1단계 기반 공사 21,717㎡

○ 승마장(실내) 2,450㎡

○ 승마장(실외) 4,383㎡

□ 향후계획

○ 클럽하우스 281㎡

○ 축사(마방) 605㎡

○ 부대시설 351㎡

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

향토산업 육성사업

담당자

농업축산과 한우산업담당

□ 사업목적 및 필요성

○ 군 경제 소득원의 50%를 차지하은 한우산업의 기반관 관광자원을

융복합한 6차 산업화를 통한 지역 경쟁력 강화

○ 단순 외식 및 판매위주의 체계변화를 통ㅎ래 다양한 소비자 기호를

충족하여 토요시장 제2의 도약

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019년

○ 위 치 : 장흥군 일원

○ 규 모 : 사업단 운영, 연구개발 홍보 마케팅, 공동이용시설, 육가공시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,084백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	20118년 이후
계	3,000		700	1,206	1,094
국 비	1,500		350	656	494
시 도 비	150		42	66	42
시군구비	600		168	264	168
지 방 채
민간자본	750		140	220	390
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 사업단 발족 및 사무국장 선임

○ 선진지 견학 추진 2회

○ 장흥한우 소비촉진 시식회 및 홍보 개최 2회

○ 한우 레시피 개발 용역 추진

○ 토요시장 간판 정비 사업 추진

□ 향후계획

○ 가공식품 및 숙성제품 연구 개발

○ 육가공시설 및 체험홍보 시설

○ 육질개선(사육환경 및 사양방법 개선)

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

지하시설물전산화사업

담당자

열린민원과 정보공간담당

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로 및 지하시설물의 각종 자료를 정보화 하여 시설물의 효율적인 관리와

각종 재난 및 안전사고 미연 방지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 6. ~ 2018. 12. 31.(3년)

○ 위 치 : 장흥군 장흥읍 시가지 일원

○ 규 모 : 13.6㎢

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	20118년 이후
계	1,920		233.34	300	1,386.66
국 비	1,152		140	180	832
시 도 비
시군구비	768		93.34	120	554.66
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(진도 : 29%)

○ 기준점 측량 완료(2급 8점, 4급 25점)

○ 도로 시설물 조사/측량 완료(13.81㎞)

○ 상수도/하수도 시설물 탐사․조사 완료(10.43㎞, 16.39㎞)

○ 도로 및 지하시설물 정위치 편집 완료

○ 공공측량 성과심사 의뢰

□ 향후계획

○ 도로와 지하시설물도 도면제작 편집