[별지6] 2023년 개별 투자사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

장흥군민의 날 및 보림문화제

담당자

문화관광실 김예진(☎860-5764)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민의 날을 개최하여 군민과의 화합을 도모하고 애향심을 고취하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 4. 28. (금)

○ 위 치 : 탐진강변 및 공설운동장

○ 규 모 : 참여인원 3,000여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	450		450
군 비	450		450

※ 행사성 사업으로 단년도, 반복사업임

□ 추진 결과(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제53회 장흥군민의 날 ·보림문화제 추진위원회 구성  : ‘23. 1.

○ 제53회 보림문화제 전야제 「헬로콘서트 좋은날」 개최 : ’23. 4. 27.

○ 제53회 장흥군민의 날 ·보림문화제 개최             : ‘23. 4. 28.

○ 제54회 장흥군민의 날 개최                         : ’24. 5. 1.

□ 향후계획

○ 제55회 군민의 날 및 보림문화제 본예산 편성        : ‘24. 10.

○ 제55회 군민의 날 및 보림문화제 행사 추진          : ’25. 1.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

옹암항 지방어항 건설사업

담당자

해양수산과 이기준(☎860-6021)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어항기능 시설 보강 및 어민소득 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 전남 장흥군 대덕읍 옹암리 38-13번지 일원

○ 규 모 : 도제 230m, 가호안 50m, 방파호안 217m, 물양장 130m,

돌제제거 80m, 선양장 5m, 준설 14,924㎥ 매립 11,836㎡ 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,110백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,110	2,020	1,075	1,200	6,890
국 비
시 도 비	8,695	1,737	924	1,032	5,926
시군구비	1,415	283	151	168	964
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계용역(1차분) 착수                  : 2021. 09. 06.

○ 해역이용협의 완료                        : 2024. 02. 29.

○ 환경영향평가 완료                        : 2024. 03. 03.

○ 공유수면매립기본계획 반영 신청           : 2024. 03. 28.

□ 향후계획

○ ’24. 10. : 공유수면 매립면허 취득

○ ’24. 11. : 건설시술심의 및 계약심사 등 행정절차 이행

○ ’24. 12. : 사업 발주

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

장흥 야구장 건립공사

담당자

스포츠산업과 김대영(☎860-6282)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠를 통한 지역균형발전 및 체육 진흥을 도모하고 대한민국 체육인재개발원과 대형 실내체육관을 연계한 지역주도 고부가가치 사업 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : ’23. 01. ~  ’25. 12.

○ 위 치 : 장흥군 부산면 지천리 464번지 일원 / 국유지 (44필지)

○ 규 모 : 야구장 2면, 부대시설 등 (35,686㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000			682	9,318
국 비
시 도 비	3,000	-	-	205	2,795
시군구비	7,000	-	-	477	6,523
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 장흥 야구장 건립공사 기본계획 및 실시설계 용역 추진 : ’24. 3. ~

○ 소규모 환경영향평가 및 소규모 재해영향평가 등 추진  : ’24. 5. ~

□ 향후계획

○ 행정절차(군관리계획 등) 이행 및 국유지 매입     : ’24.  9. ~

○ 장흥 야구장 건립공사 착공 및 준공              : ’24. 11. ~ ’25. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

공예태후 역사문화자원 개발사업

담당자

문화관광실 신용철(☎860-5782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천관산 주변의 역사·문화자원을 중심으로 어머니를 테마화하여 대한민국의 대표적인 역사·문화 관광지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2026. (4년간)

○ 위 치 : 관산읍 옥당리 일원

○ 규 모 : 정안사 관광자원화, 어머니 마실길 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,600	-	-	600	5,000
도비 (균특)	2,800	-	-	300	2,500
군 비	2,800	-	-	300	2,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 추진계획 수립(민선8기 공약사항)	: ‘22.  9.

○ 천관산 프로젝트 마스터 플랜 수립	: ‘22.  8. ~ 12.

○ ‘23년 신규사업 반영 및 균특예산 가내시(道)	: ‘22. 11.

○ 중기지방재정계획 반영	: ‘22. 12.

○ 지방재정 투자심사(자체)완료	: ‘23.  2.

○ 공유재산심의 및 관리계획 수립	: '23. 11.

○ 기본계획 수립	: ‘23.  2. ~ ‘24.  5.

○ 실시설계용역 추진	: '24.  7.

□ 향후계획

○ 총괄 및 1차년도 사업 착공	: '24. 12.

○ 사업 준공	: '26.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

제6회 회령포 문화축제

담당자

문화관광실 문지은(☎860-5762)

□ 사업목적 및 필요성

○ 명량대첩 기포지로서의 회령포의 역사성 재조명 및 전라남도

명량페스타와 연계하여 관광자원으로서의 가치 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 9. 1. (금) ~ 2023. 9. 3. (일)

○ 위 치 : 전남 장흥군 회진면 회령진성 및 회진항 물양장

○ 규 모 : 참여인원 4,000여명

○ 내 용 : 이순신 장군의 회령포 결의를 기념한 퍼레이드 및 체험 프로그램 운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	250	-	250	-	-
군 비	250	-	250	-	-

※ 행사성 사업으로 단년도, 반복사업임

□ 추진 상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 지방재정 투자심사(자체) 완료             : ‘23. 2.

○ 회령포 문화축제 개발 연구 용역 시행      : ‘23. 3. ~ 7.

○ 회령포 축제 안전관리 계획 수립           : ‘23. 8. 10.

○ 2023 장흥 회령포 이순신 축제 개최       : ‘23. 9. 1. ~ ‘23. 9. 3.

○ 2024 장흥 회령포 이순신 축제 기본계획 수립            : ‘24. 5.

○ 2024 장흥 회령포 이순신 축제 행사대행 용역 평가       : ‘24. 7.

□ 향후계획

○ 2024년 장흥 회령포 이순신 축제 개최     : '24. 10. 4.  ~ '24. 10. 6.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

노인복지관 증축

담당자

노인아동과 오정화(☎860-5871)

□ 사업목적 및 필요성

○ 늘어나는 노인복지 인구와 고령화로 인해 노인복지관 이용률이 지속적으로 증가하나 그에 따른 프로그램실 등 공간 부족 현상 발생

○ 2007년 노인복지관 개관이후 3층 증축에 대해 끊임없이 제기되었으며, 1,2층 타일 벽 수리와 안전사고 예방을 위한 보강공사 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.1.~2024.1.

○ 위 치 : 장흥군 장흥읍 동교1길 57

○ 규 모 : 652㎡ (지상3층 610㎡, 지상1층 42㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,196만원                                     (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,196	35	1,216	945
국 비
시 도 비
시군구비	996	35	73	888
지 방 채
민간자본
특별교부세	1,200		1,143	57

□ 추진상황 (진도 : 100  %)

○ 완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 장흥군 노인복지관 증축공사 실시설계 용역 변경

- 사 업 비 : 당초) 73백만원 → 변경) 91백만원

- 사업기간 : 당초) 2022.12.19.~2023.4.18.→변경) 2022.12.19.~2023.5.8.

- 변경사유 : 예상 건축공사비 증액에 따른 설계비 증액 및 과업기간 연장

○ 장흥군 노인복지관 증축공사(건축) 변경

- 사 업 비 : 당초) 1,364백만원 → 변경) 1,484백만원

- 사업기간 : 당초) 2023.7.20.~2024.1.15.→변경) 2023.7.20.~2024.1.30.

- 변경사유 : 추가공정에 따른 사업비 변경 및 공사기간 연장

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

제16회 정남진 장흥 물축제

담당자

문화관광실 윤혜원

(☎860-5771)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장흥의 우수 수(水)자원을 소재로 한 축제 개최로 장흥의 청정 이미지를 외부에 알리는 기회 마련 (탐진강 상류에 장흥댐(저수량 1억 6천㎥) 위치)

○ 축제의 준비부터 개최까지 주민의 각종 프로그램 및 자원봉사 참여를 통한 주민화합 도모

○ 축제와 관련된 연관 산업과 행사 유치를 통한 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2023. 7. 29. (토) ~ 8. 6. (일) / 9일간

○ 위    치 : 탐진강 및 편백숲 우드랜드 일원

○ 주    제 : 물과 숲 - 休

○ 슬 로 건 : 온 세상을 물로 적셔라! 장흥에 빠져라!

○ 주최·주관 : 장흥군 / 물축제 추진위원회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,694백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,694		2,694
국 비	30	-	30	-	-
군 비	2,664	-	2,664	-	-

※ 행사성 사업으로 단년도, 반복사업임

□ 2023년 추진결과(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 축제 방문객 수  : 566,250명

○ 경제적 파급효과 : 42,356백만원 (문체부 지표에 의함)

○ 방문객 만족도   : 5.96점

□ 향후계획

○ 자체평가를 통한 개선점 등을 반영한 제17회 정남진 장흥 물축제 개최

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

2023 대한민국 통합의학박람회

담당자

보건소 한강훈(☎860-6262)

□ 사업목적 및 필요성

○ 단순한 질병치료에 머물지 않고 질병의 예방과 관리를 통한 새로운 치료방법 접근

○ 서양·한의학, 보완대체의학을 융합한 환자 중심의 One-Stop 통합의료 확대

□ 사업개요

○ 기    간 : 2023. 9. 8. ~ 9. 14. (7일간)

○ 위    치 : 장흥국제통합의학박람회장 (장흥군 안양면 로하스로 157)

○ 주요내용 : 주제관, 학술행사, 테마별 체험관, 통합의학적 진료 및 체험 등

○ 규    모 : 77,742㎡ (23,516평) / 체험관 7개관, 국내 참여기관 130개 업체

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,160	-	1,420	1,320	1,420
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,910	-	670	570	670
시군구비	2,250	-	750	750	750
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 박람회 기본계획 수립, 추진위원회 구성, 대행사 선정     : 2023. 1. ~ 5.

○ 2023 제2차 (정기) 전라남도 지방재정 투자심사위원회 심사 의결 (조건부 승인) : 2023. 5. 22.

○ 박람회 홍보활동 전개, 전시체험관 조성, 안전관리계획 수립 등 : 2023. 6. ~ 9.

○ 2023 대한민국 통합의학박람회 개최            : 2023. 9. 8. ~ 9. 14. (7일간)

○ 2023 지방재정 투자심사 사후평가 보고서 제출  : 2023. 12. 18.

□ 향후계획

○ 박람회 홍보활동 전개, 전시체험관 조성, 안전관리계획 수립 등 : 2024. 7. ~ 10.

○ 제13회 2024 대한민국 통합의학박람회 개최 : 2024. 10. 18. ~ 10. 22. (5일간)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

노후관광지 재생사업

담당자

문화관광실 신용철(☎860-5782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정남진 우산도 관광지 노후 시설 개선 및 새로운 관광 콘텐츠 확충을 통한 관광지 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2024. (2년간)

○ 위 치 : 관산읍 삼산리 일원

○ 규 모 : 통일기원탑 (전망대 리모델링), 통일기원동산 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,000	-	670	1,330	-
도비 (균특)	1,000	-	335	665	-
군 비	1,000	-	335	665	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 추진계획 수립(민선8기 공약사항)	: ‘22.  9.

○ 사업구상 및 계획 수립 (민선8기 공약)	: ’22.  8.

○ 기본 및 실시설계 용역 추진	: ’23.  1. ~ 6.

○ 노후관광지 재생사업 공모 선정 (道)	: ’23.  3.

○ 통일기원동산 조성 공사 착공	: ’23.  9.

- 화목류 식재 (철쭉, 무궁화, 망종화 등) 및 통일 상징 조형물 설치

○ 통일기원탑 콘텐츠 제작설치 용역 착수	: ’23. 10.

- H=45.9m (10층) 통일 콘텐츠 개발 및 건물 리모델링

○ 통일기원동산 조성 완료	: ’24.  5.

□ 향후계획

○ 통일기원탑 콘텐츠 제작·설치 완료	: ’24. 11.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

장흥한우 농촌융복합지구 조성사업

담당자

축산과 김이진(☎860-6707)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장흥한우 생산, 가공, 유통, 체험, 관광, 축제, 외식 부문이 함께 어우러진 융복합 거점지구 조성·운영을 통해, 장흥한우 산업 새로운 도약 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2026년(4년)

○ 위 치 : 장흥읍, 용산면, 안양면

○ 사업내용

- 한우 융복합 인프라 구축 : 가공인프라 업그레이드, 체험ㆍ관광 융복합산업관 조성

- 고부가가치화 및 브랜드화 : 가공상품 및 체험ㆍ관광 콘텐츠 개발

- 역량강화 및 네트워크 구축 : 참여주체 역량강화, 융복합산업화 시스템 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000	-	400	739	1,861
국 비	1,500	-	200	150	1,150
시 도 비	345	-	32.7	99	213.3
시군구비	805	-	76.3	231	497.7
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	350	-	91	259	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 장흥한우 농촌융복합산업화 추진단 구성        : ’24. 1.

○ 한우 가공상품 온라인 홍보 및 지원            : ’24. 6.

○ 참여주체 역량 강화 교육                      : ’24. 7.

□ 향후계획

○ 장흥한우 및 육가공품 온‧오프라인 홍보        : ’24 ∼ ’26

○ 장흥 한우 체험·관광 융복합산업관 구축        : ’24 ∼ ’26

□ 사업변경 내역

○ 2024년 국비 일부 미교부에 따라 연도별 사업비 조정

※ 당초 400백만원 → 변경 150백만원

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

축산기자재 종합물류센터 신축사업

담당자

축산과 류담은(☎860-6706)

□ 사업목적 및 필요성

○ 축산농가 경영에 필수적인 축산기자재 등 축산 관련 물품의 도내 유통시설 부족에 의한 물품 구입의 시간적·경제적 어려움 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ∼ 2024년(2년)

○ 위 치 : 전남 장흥군 장흥읍 장흥대로 3244

○ 규 모 : 1개소 (지상3층 / 1,220.8㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,600	-	0	2,600	0
국 비	0	-	-	-	-
시 도 비	1,300	-	-	1,300	-
시군구비	780	-	-	780	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	520	-	-	520	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 군 계획시설 실시설계 인가 및 건축 허가      : ’23. 3. ~ 4.

○ 설계변경                                   : ’23. 12. ~ ’24. 03.

○ 사업계획 변경 승인 (전남도)                 : ’24. 04.

○ 계약심사 및 일상감사                       : ’24. 04.

○ 공사 계약                                  : ’24. 05. 17.

○ 착공                                       : ’24. 06. 04.

□ 향후계획

○ 준공                                       : ’24. 10.

○ 운영체계 구축 (장흥축협)                     : ’24. 10.

□ 사업변경 내역

○ 사업목적 달성 및 향후 원활한 운영을 위해 건축 규모 변경

※ 당초 996.8㎡ (지상 2층) ⇒ 변경 1,220.8㎡ (지상 3층)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

장흥군 생활자원회수센터(재활용 선별장) 설치사업

담당자

환경관리과 김상현(☎860-7831)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 재활용품 선별시설의 내구연한 도래와 비효율적인 인력 수선별 시스템으로 인한 경제성 저하 및 노동자의 업무환경을 개선하고 현대화된 생활자원회수센터를 설치하여 재활용가능자원의 선별율을 극대화하고 안정적인 처리와 운영관리 여건을 개선하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024 ~ 2025 / 2년간

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 부산면 부춘리 산 96번지 일원

○ 규 모 : 재활용선별시설 10톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,483백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,483	-	18	300	6,165
국 비	1,945	-	-	-	1,945
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,538	-	18	300	4,220
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 사업부지 군 관리계획 변경 결정 완료            : 2022. 12.

- 근린공원 부지 → 폐기물 처리시설 부지[증 2,531㎡]

○ 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료              : 2023.  5.

○ 지방재정 투자심사 완료                         : 2023.  5.

○ 공유재산 심의회 및 관리계획 군의회 승인         : 2023.  9. ~ 10.

○ 2025년 신규사업 사전예산협의 및 예산 신청      : 2024.  1. ~  3.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역     : 2024. 8. ~ 2024. 12.

○ 공사 시행                 : 2025. 1. ~ 2025. 12.

○ 사용 개시                 : 2026. 1. ~

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

섬숲 경관복원사업

담당자

산림휴양과 한민건(☎6089)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연적·인위적으로 훼손된 산림 생태를 난대상록활엽수림으로 복원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 5. ~ 12.

○ 위 치 : 장흥군 안양면 사촌리 장재도 일원

○ 규 모 : 20㏊

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,871백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1.871	0	1,871	0	0
국 비	1.310	-	1,310	0	0
도 비	168	-	168	0	0
군 비	393	-	393	0	0

□ 추진상황 (추진율 : 100%)

○ 2023년 서남해안 섬숲 경관복원사업 계약완료        : 2023. 5. 16.

○ 2024년 장환도 섬숲 경관복원사업 실시설계 계약완료 : 2023. 9. 12.

○ 2023년 서남해안 섬숲 경관복원사업 준공완료        : 2023. 12. 18.

○ 2024년 장환도 섬숲 경관복원사업 실시설계 준공완료 : 2023. 12. 20.

□ 사업변경 내역

○ 변경내시에 따른 총사업비 감액 : (당초) 2,198백만원 (변경) 1,871백만원

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

장흥 반다비 체육센터&복지회관 건립

담당자

스포츠산업과 유인상(☎860-6273)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공 이용 체육시설을 구축하여 장애인들에 대한 편견을 해소하고 체육활동을        통한 장애인의 적극적인 사회참여 유도 및 생활체육발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~2025.(4년간)

○ 위 치 : 장흥읍 건산리 578-1 번지 등 3필지(5,226㎡)

○ 규 모 : 대지면적 5,226㎡(연면적 2,400㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  13,000 백만원(국비3,000, 군비10,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계
국 비	3,000	-	69	621	2,310
시 도 비
시군구비	10,000	-	-	-	10,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ ‘2022 생활밀착형(장애인형)국민체육센터 건립 사업’ 공모 선정

○ 공공건축 사전검토 및 심의 이행 : ’23. 7. 10. ~ 10.

○ 실시설계 용역 실시 : ‘24. 1. ~ 현재진행중

□ 향후계획

○ 건축행정절차 이행 : ‘24. 7. ~ ’24. 12.

-기술심의, 안정성 , 경제성 , 구조심의, BF예비인증 등

○ 착공 : ‘ 24. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사 업 비 : 당초 100억원(국비30, 군비70) / 변경130억원(국비30, 군비100)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

수산물 콜드체인 시스템 구축사업

담당자

해양수산과 강명지 (☎860-6011)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장흥노력항은 2009년 장흥 - 제주 간 쾌속 여객선이 취항한 이후, 연 50만명이 이용하며 지역경제 활성화에 큰 영향을 미쳤으나, 세월호 참사에 따른 여객 운송사업 불황과 선박법 강화로 중고 여객선 운항에 제한이 생기는 등 악재로 2015년 중단된 이후 현재까지 방치됨

○ 고등어 선단유치를 통한 주산지인 제주도 223 조업구역과 부산공동어시장 간의 250km (13시간 소요) 거리대비 제주-장흥노력항 간 80km (4시간소요)로 지리적 이점으로 고등어 신선도 확보와 선단의 경영비(유류비, 인건비 등) 절감 및 양륙·선별·유통 全과정의 저온유통체계 구축을 통한 안정적인 수산물 공급

○ 운반선 1일 2척 입항에 따른 관내 선수품 (유류, 식료 등) 공급과 지역 소비로 경제 활성화 및 저온 위판장과 연계한 잡어 등(갈치, 삼치, 방어, 오징어 등) 유통으로 지역관광 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2024년 (4개년)

○ 위 치 : 장흥군 회진면 노력도1길 465 (장흥노력항 일원)

○ 규 모 : 급냉시설 1,274㎡, 제빙·저빙시설 840㎡, 선별장 990㎡, 인양기 15톤 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,950백만원 (도 4,375, 특 600, 군 8,975)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	13,950		4,198	9,752
국 비
시 도 비	4,375		1,099	3,276
시군구비	9,575		3,099	6,476
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40 %)

○ 2020.   8. : 수산물 콜드체인 자체 종합계획 수립 (300억)

○ 2020.   9. : 제3차 지방재정 자체 투자심사 (급냉시설, 55억)

○ 2020. 10. : 장흥군 공유재산 심의 완료

○ 2020. 11. : 실시설계 용역 시행[건축, 기계(급냉) 전기]

○ 2021.   3. : 1회 추경 예산확보 (33.5억)

○ 2021.   4. : 고등어 선단 유치 타당성 조사 및 기본계획 수립

○ 2021.   5. : 실시설계 완료[건축, 기계(급냉) 전기]

○ 2021.   6. : 계약심사 완료 [건축 18억 기계 39억, 전기 21억]

○ 2021.   7. ~ 12. : 회진면 주민설명회 및 어촌계 동의서 징구 (찬성 55%)

○ 2021.   9. : 장흥노력항 수산물 콜드체인 시설물 운영관리 조례 제정

○ 2021. 12. : 장흥노력항 해양오염물 부유사 확산 조사용역 완료

○ 2022. 10. : 2회 추경 예산확보 (59.5억)

○ 2022. 12. : 콜드체인 시스템 사용자 선정(장흥군수협)

○ 2022. 12. : 건축공사, 기계설비 공사 사업 발주

○ 2023.   5. : 급냉시설 건축공사 착공

○ 2023. 12. : 급냉시설 건축공사 준공

○ 2024.   6. : 전남도 사업계획 변경 승인 요청

□ 향후계획

○ 2024. 12.한 : 기계설비, 전기, 소방, 통신 공사 추진 및 준공

○ 2025. 1. ~  : 시설물 정상 운영

□ 사업변경 내역 (추진 중)

○ 당초 사업계획을 다음과 같이 변경하여 고등어 선단 유치 및 시설물 운영을 통해 성공적인 사업목적 달성하고자 함

구 분	당 초	변 경	변 경 근 거
취급대상	고등어	고등어 및 수산물	▸고등어 어획량 변화에 대한 대응 체계 마련 및 어민 의견 반영 ▸사용자의 안정적인 경영 지원
냉동시설	급냉실 8칸 (1칸 당 20~25톤 처리)	급냉실 4칸	▸1일 처리 예상량(약88톤) 반영
		냉동냉장실 4칸	▸유통 前 보관 기간(2~3일) 반영

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

용산면 운주지구 농촌공간정비사업

담당자

농촌활력사업소 이윤석(☎860-6643)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌유해시설(돈사 및 축사 등) 철거를 통해 지역환경과 정주 여건을

개선하여 주민들의 삶의 질을 향상시키기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2026년

○ 위 치 : 장흥군 용산면 운주리 192 일원

○ 규 모 : 대규모 돈사 철거 및 귀농청년 단기임대주택 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,000	1,200	1,800	3,000	6,000
국 비	6,000	600	900	1,500	3,000
시 도 비	1,800	180	270	450	900
시군구비	4,200	420	630	1,050	2,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ (‘23.7) 기본계획서 제출

○ (‘24.7) 기본계획 보완 제출(1차~5차)

□ 향후계획

○ (’24.8) 실시설계 설계 공모(기본계획 승인시)

○ (‘24.10) 대규모 돈사 철거 실시

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

장흥호 스카이워크 조성사업

담당자

문화관광실 신진호(☎860-5784)

□ 사업목적 및 필요성

○ 25여년 동안 개발이 전무한 상태로 자연환경이 잘 보존되어 천혜의 자연경관을 자랑하는 ‘장흥호’를 대한민국 대표 생태관광 여행지로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. ~ 2026. (3년간)

○ 위 치 : 유치면 대리 일원

○ 규 모 : 스카이워크 (출렁다리) L=310m 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,000	-	-	400	7,600
도비 (균특)	4,000	-	-	200	3,800
군 비	4,000	-	-	200	3,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 타당성조사 및 기본계획 용역 착수	: ’23.  5. ~ 11.

○ 신규사업 건의 및 예산신청 협의	: ’23.  6.

○ 투자심사 완료 (道)	: ’23. 11.

○ 신규사업 확정 (道)	: ’23. 11.

○ 실시설계 용역 추진	: ’24.  7..

□ 향후계획

○ 행정절차 추진 (계약심사 등)	: ’24. 12.

○ 총괄 및 1차년도 공사 착공	: ’25.  1.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

장흥군 폐기물처리시설(소각장) 설치사업

담당자

환경관리과 이주훈(☎860-7834)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장흥군 그린환경센터에서 현재 운영중인 소각시설(20톤/일)의 노후화로 인하여 성능이 저하되었으며, 폐기물 발열량 증가로 인해 소각처리량 감소의 문제가 발생하고 있음. 이에 따라, 향후 발생되는 생활폐기물을 적합하게 처리하기 위해 신규 소각시설(30톤/일)을 설치하여 생활폐기물의 적법하고 안정적인 처리와 쾌적한 생활환경을 유지하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024 ~ 2026 / 3년간

○ 위 치 : 전남 장흥군 부산면 덕정길 206 / 현 소각장 위치

○ 규 모 : 신규 소각시설(30톤/일) 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,190백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	20,190	48	-	1,000	19,142
국 비	6,057	-	-	300	5,757
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	14,133	48	-	700	13,385
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 타당성조사 및 기본계획 용역 완료          : 2022.  5.

○ 소각시설 기술진단 완료(한국환경공단)       : 2023.  3.

○ 지방재정 (중앙)투자심사 완료               : 2023.  8.

○ 공유재산 심의회 및 관리계획 군의회 승인    : 2023.  9. ~ 10.

○ 2024년도 환경부 신규사업 확정              : 2023. 10.

□ 향후계획

○ 전라남도 건설기술심의                      : 2023. 10.

○ 기본 및 실시설계 용역                     : 2024.  8. ~ 2025.  6.

○ 공사 시행                                 : 2025.  6. ~ 2026. 12.

○ 사용 개시                                 : 2027. 1. ~

□ 사업변경 내역

○ 해당 사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

정남진 명품 특산품 축제

담당자

문화관광실 윤혜원(☎860-5771)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산재된 소규모 축제를 통합하고 지역 특산물의 우수성 홍보와 체류형 관광객 유치를 위한 특산물 축제 운영

□ 사업개요

○ 기    간 : 2025년 4월말 ~ 5월초 추진 (예정)

○ 위    치 : 탐진강변 일원

○ 주요내용 : 특산물 전시 홍보·판매관 운영, 먹거리·볼거리 행사 개최, 체험·참여 프로그램 운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	500	-	-	-	500
군 비	500	-	-	-	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○ 추진회의 결과 내실있는 축제 운영을 위해 2025년도 개최 결정

□ 향후계획

○ 특산물 축제 업무 이관 (장흥축제관광재단 설립 후 )       : ‘24. 8. ~

○ 전문가를 통한 명칭 확정, 대표·핵심·주요 프로그램 개발   : ’24. 9. ~

○ 관광 박람회 등을 통한 사전 홍보                       : ‘24. 9. ~

○ 축제 개최                                             : ’25. 4월말

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : (당초) ‘24. 4월말 ~ 5월초 → (변경) ’25. 4월말 ~ 5월초

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

정남진 은하수로드 관광명소 조성사업

담당자

문화관광실 신진호(☎860-5784)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정남진 대교 개통 및 장흥~고흥간 연륙교 건설과 연계한 정남진 장흥의 차별화된 남파랑길 해안도로를 중심으로 자연 친화적인 관광 콘텐츠를 구축하여 남해안 관광벨트 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. ~ 2027. (4년간)

○ 위 치 : 안양면 ~ 수문 ~ 전망대 ~ 회진항 일원

○ 규 모 : 체험형 미디어 파빌리온, 포토존 전망시설, 복합관광휴게시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	17,100	-	-	832	16,268
국 비	8,550			416	8,134
도비 (균특)	2,569	-	-	125	2,444
군 비	5,981	-	-	291	5,690

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 타당성조사 및 기본계획 용역 착수	: ’23.  8.

○ 남부권 광역관광 개발사업 계획 확정 / 문체부	: ’23. 12.

○ 투자심사 완료 (道)	: ’23. 11.

○ 기본계획 중간보고	: ’24.  7.

□ 향후계획

○ 실시설계 추진	: ’24.  9.

○ 총괄 및 1차년도 공사 착공	: ’25.  5.

사업명

산림치유형 워케이션 조성사업

담당자

산림휴양과박상현(☎6101)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일과 휴가를 조합한 일정기간 동안 우드랜드에서 업무와 휴식이 동시에 가능한 체류형 워케이션 조성

○ 업무공간과 우드랜드 산림 체험프로그램을 제공하여 현대 직장인들에게 일과 삶의 균형이 될 수 있는 환경조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024년 ~ 2025년

○ 위 치 : 장흥읍 우산리 4-2, 산20-1

○ 규 모 : 공유오피스 조성 및 숙박시설 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,000	-	-	100	1,900
국 비
시 도 비
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타 (지방소멸기금)	2,000	-	-	100	1,900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 행정절차 진행중

- 건축기획용역 진행 중

□ 향후계획

○ 공공건축심의회  : 24. 8월중

○ 설계용역발주    : 24. 8월 중

○ 공사발주        : 24. 12월 중

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 현재까지 변동사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

우드랜드 야간경관 조성사업

담당자

산림휴양과 박상현(☎6101)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우드랜드 야간경관 개선 및 야간활동 프로그램 확대를 통해 우드랜드 체류형 관광지로 발적 도약하는 계기

○ 장흥역과 인접한 우드랜드 고유의 특성을 살린 장흥 도시의 대표적 야간경관 홍보 관광 랜드마크 기틀 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024년 ~ 2025년

○ 위 치 : 장흥읍 우산리 산20-1(우드랜드 입구 ~ 억불산 정상)

○ 규 모 : 미디어 조명연출, 보행 경관개선, 포토존, 콘텐츠 제작 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	-	-	4,000	1,000
국 비
시 도 비
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타 (지방소멸기금)	5,000	-	-	4,000	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 행정절차 진행 중

- 제안서 평가위원회 개최 및 평가위원 선정 추진 중

□ 향후계획

○ 협상적격자 선정 및 계약체결   : 24. 8월 중

○ 설계용역                      : 24. 8월 ~ 12월

○ 공사시행                      : 25. 1월 ~

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 현재까지 변동사항 없음