11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 군에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사 업 명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
정남진 로하스타운 조성사업	360,000	10,700	900	348,400	2019	2010	20
관산지구 소규모 수도시설개량사업	5,149	2,764	1,185	1,200	2014	2010	92
안양 면단위 하수처리장 설치사업	3,165	1,117	2,048	-	2014	2010	90
안양 하수관거 정비사업	6,400	-	714	5,686	2017	2010	5
통합의료센터 건립사업	25,000	351	3,870	20,779	2015	2011	20
통합의학박람회	6,050	3,450	1,300	1,300	지속	2012	-
장평 제2농공단지 조성사업	3,500	289	2,659	552	2014	2011	98
대덕읍 전통시장 시설 현대화 사업	2,860	-	1,430	1,430	2014	2012	20
시설원예 품질개선사업	3,621	-	-	3,621	2014	2013	10
장흥군 공공형 승마장 조성사업	2,970	-	120	2,850	2016	2013	4
목재 전문 산업화 단지 조성사업	23,000	-	400	22,600	2016	2013	5

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

정남진 로하스타운 조성사업

담당자

로하스타운조성사업소

김군창 (☎860-0535)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전원생활과 자연환경속 건강한 삶을 추구하는 은퇴자, 귀농․귀촌자

등을 대상으로 친환경 생태휴양도시 조성

○ 정주인구 유입으로 경제소비인구 증가 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010~2019(10년간)

○ 위 치 : 전남 장흥군 안양면 기산리, 비동리 일원

○ 규 모 : A=233만㎡ / 유입인구 3,000명(1,500세대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 360,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	360,000	10,700	900	12,700	335,700
국 비	7,350		400	500	6,450
시 도 비	5,200				5,200
시군구비	17,575	10,700	500	2,200	4,175
민간자본	329,875			10,000	319,875

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ‘11.  12월 : 개발촉진지구 지정 변경 승인(국토해양부)

○ ‘13. 9. 12 : 투자협약체결

⇒ 전라남도, 장흥군, 랜드러버스코리아(주), 대우산업개발(주), (주)대명기술개발

○ ’13. 12. 19 :『정남진 로하스타운 기공식』

○ ’14. 2~8월 : 1단계지구(107세대)실시설계, 시범지구(43세대) 분양 및 추진

○ ‘14. 8월 : 토지매입 233만㎡중 161만㎡(69%) / 110억원

□ 향후계획

○ 시범지구(43세대) ’14. 12월 입주예정, 1단계지구(107세대) ’15. 10월 입주예정

○ ’15년 이후 매년 200~250세대 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

관산지구 소규모 수도시설

개량사업

담당자

수도사업소

이명록 (☎860-0521)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 소규모 수도시설을 개량하여 광역상수도 미 공급지역 3개 마을에

맑고 깨끗한 장흥댐 물을 공급하기 위한 사업으로 식수난 해결 및 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1. 11 ~ 2015. 1. 9

○ 위 치 : 관산읍 방촌마을 외 2개마을

○ 규 모 : 상수관로L=20.7km, 배수지 1,200톤, 가압장 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,149백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	5,149	2,764	1,185	1,200	-
국 비	3,604	1,935	829	840	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,545	829	356	360	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 92%)

○ 총괄공사 추진 : ‘12. 1. 11 ~ ‘15. 1. 9

- 3차분(마무리) 공사 : ‘14. 3. 1 ~ ’15. 1. 9

□ 향후계획

○ 공사 준공(‘15. 1. 9)이후 가정급수관로 추진하여 광역상수도(장흥댐) 물 공급

사업명

안양 하수관거 정비사업

담당자

수도사업소

박신주 (☎860-0747)

□ 사업목적 및 필요성

○ 안양면 하수관거를 분류식으로 정비하여 생활하수를 처리함으로써

하수처리 효율증대 및 주민 생활환경 개선에 기여하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 01 ～ 2013. 12.

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 안양면 소재지 일원

○ 규 모 : 관로 L=14.24km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,400		714	5,686
국 비	4,500		499	4,001
시 도 비
시군구비	1,900		215	1,685

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 실시설계 용역 및 행정협의 : 2011. 01. ～ 2014. 5.

○ 공사착공 : 2014. 06.

○ 공사준공 : 2017. 06.

□ 향후계획

○ 1차분 관로매설 및 준공 : 2015. 6. 29

○ 2차분 착공 및 준공 : 2017. 6

□ 사업변경 내역(사유) : 설계결과 기본계획 연장과 설계연장 상이, 관로 연장 증가

○ 당 초

- 사업규모: L=14.24km, 총사업비: 6,400백만원, 사업기간: ‘11. 1 ～ ’13. 12.

○ 변 경

- 사업규모: L=21.461km, 총사업비: 8,084백만원, 사업기간: ‘14. 06 ～ ’17. 06.

사업명

안양 면단위 하수처리장 설치사업

담당자

수도사업소

박신주 (☎860-0747)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수관망을 체계적으로 정비하고 투자효율을 극대화하기 위해 하수도정비

기본계획 수립지구에 집중 투자하여 하수처리 효율성 및 선진화 구축.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 01 ～ 2012. 12..

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 안양면 운흥리 702-5 일원

○ 규 모 : 시설용량 270톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,165백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,165	0	1,117	2,048	0
국 비	2,215		781	1,434
시 도 비			-
시군구비	950		336	614

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  95%)

○ 실시설계 용역 및 행정협의 : 2011. 01. ～ 2014. 5.

○ 공사착공 : 2012. 06.

○ 공사준공 : 2014. 10.

□ 향후계획

○ 1차분 관로매설 및 준공 : 2013. 6. 27

○ 2차분 착공 및 준공 : 2014. 10

□ 사업변경 내역(사유내용) : 설계결과 기본계획 연장과 설계연장 상이, 사업비 감소

○ 당 초

- 사업규모: Q= 270톤/일, 총사업비: 5,000백만원, 사업기간: ‘11. 01 ～ ’12. 12.

○ 변 경

- 사업규모: Q= 270톤/일, 총사업비: 3,165백만원, 사업기간 : ‘12. 06 ～ ’14. 06.

사업명

통합의료센터 건립

담당자

기업지원과

김근형 (☎860-0387)

□ 사업목적 및 필요성

○ 환자 중심의 의료서비스 제공을 위해서 양․한방, 보완대체의료 등 다양한 의료를

하나로 융합, 서비스하는 통합의료 인프라 구축 필요

○ 노인성 만성질환, 환경성질환 등 효율적 의료비용 관리와 의료서비스가 결합된

새로운 의료서비스 창출로 국내 의료 서비스 산업 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012 ~ 2015년

○ 위    치 : 장흥군 안양면 비동리 로하스타운내

○ 사업규모 : 건축연면적 A=6,610㎡(지상3층, 지하1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	25,000	1,228	2,993	8,148	12,631
국 비	17,500	1,000	2,095	5,704	8,701
시 도 비	1,900	78	449	1,222	151
시군구비	1,900	150	449	1,222	79
민간자본	3,700				3,700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본계획수립 용역 추진                               : '12. 4. 9 ~ 11. 14.

○ 통합의료센터 관련 총사업비 조정(24,594백만원)         : '13. 1월 ~ '13. 7월

○ 기본 및 실시설계용역착수                             : '13. 10. 04

○ 계획설계 보고회                                      : '14. 2. 26

○ 공공디자인 심의                                      : '14. 7. 04

○기본설계(안)에 따라 총사업비 조정 협의 중(기획재정부)  : '14. 8월 현재

□ 향후계획

○ 기본설계 협의에 따른 총사업비 조정            : '14. 8월

○ 기본 및 실시설계결과 협의(기획재정부)          : '14. 8월

○ 공사 착수 및 준공                             : '14. 9월 ~ ’15. 12월

○ 통합의료센터 운영병원 선정                    : '14. 12월한

사업명

통합의료센터 건립

담당자

기업지원과

김근형 (☎860-0387)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 관리지침 제 14조 2항에 의거 기본계획수립으로 기획재정부장관과

사업규모 및 총사업비 조정(2013년 7월)협의

구분	사업규모	총사업비(억원)					비고
		계	국	도	군	민자
당초	건축연면적 A=6,610㎡ (지상3,지하1)	250	175	19	19	37
변경	건축연면적 A=11,480㎡ (지상2,지하1)	246	172	37	37	-

사업명

대한민국통합의학박람회

담당자

기업지원과

김봉열(☎860-0874)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장흥지역의 생약초 한방특구 지정과 관련된 비교 우위의 우수 천연자원

(한약재 등)의 지역특화 연계하여 의료산업화 육성으로 지역경제 활성화와

지방의 자립화 계기 마련

○ 양․한의학적 의료지식과 검증된 대체의학의 치료기법이 융합하여 환자 중심의

의료서비스인 통합의학(IM : Integrative Medicine)에 대한 정보교류 및

대중화로 의료 관광 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 3. ∼ 12.

○ 위 치 : 장흥군 관산읍 천관산 일원

○ 규 모 : 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,900		1,300	1,300	1,300
국 비
시 도 비	1,800		600	600	600
시군구비	2,100		700	700	700

□ 추진상황

○ 박람회 세부추진계획 수립                          : ‘14. 2.  4

○ 대한민국통합의학박람회 추진위원회 구성            : ‘14. 2. 13.

○ 행사운영 대행사 선정                              : ‘14. 4. 16.

□ 향후계획

○ 참여 의료기관․협회단체 유치 섭외 활동          : '14. 3. ~ 9월

○ 박람회장 환경 및 시설 조성                      : 14. 8. 30

○ 주무대, 주제관(TFS텐트) 등 행사 시설물 설치      : ‘14. 10. 19

○ 2014 대한민국통합의학박람회 개최            : '14. 10. 22 ∼ 28 / 7일간

사업명

대덕읍 전통시장 현대화사업

담당자

지역경제마케팅과

위재봉 (☎860-0328)

□ 필요성 및 기대효과

○ 전통시장 시설현대화 사업으로 시장 환경개선과 고객 편의 제공으로

입점상가의 매출 극대화 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013년 ～ 2014년

○ 위    치 : 장흥군 대덕읍 신월리 111번지

○ 사업규모 : 시장 재건축 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,367백만원(국비 2,355, 시군구비 1,012)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,367	1,357	73	1,937
국 비	2,355	949	51	1,355
시 도 비
시군구비	1,012	408	22	582

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계용역 50%)

○ 기본 계획                          : ‘12. 7월

○ 설계 용역                          : ‘13. 4월 ~ 10월

○ 시설현대화 우수시장 선진지 견학    : ‘13. 7월

□ 향후계획

○ 임시 시장 설치 및 이주             : ‘14. 9월한

○ 공사 시행                          : ‘14. 5월 ~ ’15. 2월

○ 시장 이주 및 주변정비(명칭공모 등) : ‘14. 2월한

○ 시장 개장                          : ‘14. 3월한

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 2,860백만원 ⇒ 3,367백만원(증 507백만원) / 편의시설 등 추가 확충

사업명

장평 제2농공단지 조성사업

담당자

기업지원과

김규표 (☎860-0353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적한 농공단지 조성으로 농촌지역 균형발전 및 농외소득원 개발을

통한 농가소득 증대 도모

○ 중소기업체에 쾌적하고 저렴한 공장용지 제공으로 도농 지역균형발전을

통한 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 위    치 : 장흥군 장평면 봉림리(기존장평농공단지 연접지역)

○ 사업기간 : 2012 ~ 2014(3년)

○ 면    적 : 47,008㎡

○ 사업시행 : 공영개발

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,500	289	2,659	552	0
국 비	995	82	816	97	-
시 도 비	71	7	59	5	-
시군구비	2,434	200	1,784	450	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 2012년 신규조성 농공단지 타당성 조사결과         : ‘11. 4. 28

- 농림수산식품부 / 적합판정(2012년 사업확정)

○ 기본계획 및 실시설계용역                            : ‘11.6.16 ~ '12.5.23

○ 개발계획(안) 및 사전환경성검토서(초안) 공람공고   : ‘12. 3. 9.

○ 농공단지 지정고시                                : ‘12. 8. 29.

○ 공사 착공                                        : ‘13. 4. 23

□ 향후계획

○ 농공단지 완공 및 분양                            : ‘14. 12월

사업명

장평 제2농공단지 조성사업

담당자

기업지원과

김규표 (☎860-0353)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 공사중 암반증가에 따른 군비 증액(425백만원) 및 도비지원 71백만원에서 9백만원 증액(80백만원)으로 총 사업비 조정

구분	사업규모	총사업비(억원)					비고
		계	국	도	군	민자
당초	A=47,008㎡	3,500	995	71	2,434	-
변경		4,015	995	80	2,940	-

사업명

시설원예품질개선사업(원예전문)

담당자

친환경농축산과

임상록 (☎860-0384)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원예전문단지 시설의 현대화, 규모화, 전문화를 지원함으로써 원예농산물의

품질개선 및 안정적인 수출기반 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 8. ~ 2014. 12.

○ 위 치 : 장평면 청용리  410-1번지외 16필지

○ 규 모 : 30,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,621백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,621			3,621
국 비	2,173			2,173
시 도 비	72			72
시군구비	652			652
지 방 채	-			-
민간자본	724			724
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 온실신축 사업 계약 및 착공계 제출 ‘14. 7. 14.

○ 온실 기초 공사 : ‘14. 7. 17 ~

□ 향후계획

○ 온실 골조 및 유리설치 : ‘14. 9. 10. ~ 11. 10.

○ 난방 및 전기 공사 : ‘14. 10. 15. ~ 11. 30.

사업명

장흥군 공공승마장 조성사업

담당자

친환경농축산과

백형균 (☎860-0394)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새로운 성장 동력인 말 산업과 연계한 승마인구의 저변 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016년도

○ 위 치 : 장흥군 안양면 기산리 로하스타운 조성지역 내

○ 규 모 : 부지 29,750㎡, 시설 3,687㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,970백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,970	-	120	1,180	1,670
국 비	650	-	60	590
시 도 비	130	-	12	118
시군구비	2,190	-	48	472	1,670
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

○ 공공승마장 설계 완료

□ 향후계획

○ 2014년 공사착공

- 1단계 공사 완료 : 기반조성, 실내승마장, 실외승마장 완공

○ 2015년 ~ 2016년도

- 2단계 공사 착공(완공) : 클럽하우스, 마사, 창고 등 기반시설

사업명

목재전문산업화 단지조성사업

담당자

환경산림과

곽광호 (☎860-0422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 목재의 연구개발, 세계 수준의 목제품개발, 판로지원 등 산업화 추진을 통해

산림소득 향상과 국가경쟁력 강화

○ 기존 우드랜드, 목공예 공방, 전통생활가구단지와 연계하여 목재산업의 집적화를

통해 소득창출 기반 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016

○ 위 치 : 전남 장흥군 장흥읍 우산리 8번지

○ 규 모 : 연면적 2,873.33㎡(지하 1층, 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	23,000		400	3,060	19,540
국 비	11,500		200	1,530	9,770
시 도 비	2,300			306	1,994
시군구비	9,200		200	1,224	7,776
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 목재산업 클러스터 구축방안 학술용역 : ‘11. 11. 25 ～ ’12. 03. 03

○ 목재전문 산업화단지 기본 및 실시설계 : ‘13. 11월～ ’14. 5월

□ 향후계획

○ 창업보육센터 공사 착공 및 준공 : 2014. 8월 ~ 2016. 2월

○ 연구동 및 장비구축, R&D 용역 : 2015. 1월 ~ 2016. 12월